Паспорт федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" (утв.Проектным комитетом по федеральным проектам "Развитие физической культуры и массового спорта", Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", "Развитие спорта высших достижений" , (протокол от 23 декабря 2021 г. N 1))
Утвержден
Проектным комитетом
по федеральным проектам
"Развитие физической культуры и
массового спорта",
"Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)",
"Развитие спорта высших достижений"
(протокол от 23 декабря 2021 г. N 1)

Паспорт федерального проекта

Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)

1. Основные положения

Краткое наименование федерального проекта	Бизнес-спринт	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2030	
Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации	
Руководитель федерального проекта	Кадыров А.Р.	Первый заместитель Министра	
Администратор федерального проекта	Картошкин С.А.	заместитель директора Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"	
		Направление (подпрограмма)	Массовый спорт и подготовка спортивного резерва	

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

N п/п	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект	
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	
1.1.	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет	
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	
2.1.	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет	
3	Уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом	
3.1.	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов	

3. Показатели федерального проекта

N п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год	Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73% граждан трудоспособного возраста	
1.1.	Доля средств внебюджетных источников в общих расходах на финансирование физической культуры и спорта	ФП	Процент	10,0000	2021	-	-	-	-	10,0000	11,0000	12,0000	13,0000	20,0000	Государственная статистика	
1.2.	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ФП	Процент	34,7000	2021	-	-	-	-	42,4000	46,2000	50,0000	53,9000	73,0000	Государственная статистика	
1.3.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	ГП	Процент	58,0000	2021	-	-	-	-	59,0000	60,0000	62,0000	64,0000	74,0000	Государственная статистика	

4. Помесячный план достижения показателей федерального проекта в 2022 году

N п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам	На конец 2022 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73% граждан трудоспособного возраста	
1.1.	Доля средств внебюджетных источников в общих расходах на финансирование физической культуры и спорта	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
1.2.	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ФП	Процент	36,90	37,40	37,90	38,50	38,90	39,40	39,90	40,40	40,90	41,40	41,90	42,40	
1.3.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	ГП	Процент	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,50	58,50	58,50	59,00	59,00	59,00	

5. Результаты федерального проекта

N п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
1	Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73% граждан трудоспособного возраста	
1.1	Разработаны проекты документов по созданию и эксплуатации объектов спорта, обустройству общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, а также для разработки комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	17,0000	11,0000	12,0000	-	-	Разработаны проекты сводов правил, регламентирующих требования по созданию и эксплуатации типов объектов спорта, в том числе для обустройства общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, повышения эффективности эксплуатации объектов спорта и продвижения спортивных компетенций; проекты национальных стандартов ГОСТ Р (первые редакции), регулирующих требования к конструктивным элементам объектов спорта и спортивному оборудованию и инвентарю. Разработаны проекты нормативных документов, направленные на создание комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов	
1.2	Привлечены дополнительные внебюджетные инвестиции на развитие спортивной инфраструктуры	-	Миллион рублей	0,0000	2021	-	-	-	-	1 00 0,0000	1 00 0,0000	-	-	-	Привлечены внебюджетные инвестиции на развитие спортивной инфраструктуры в размере не менее 10 рублей на каждый использованный рубль предоставленной кредитным организациям субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов	
1.3	Созданы (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры массового спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	19,0000	116,0000	-	-	Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание (реконструкцию) не менее 70 объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве и концессионных соглашений	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов	
1.4	Созданы "умные" спортивные площадки	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	90,0000	67,0000	65,0000	-	-	Субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок, обеспечивающих проведение самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам. Будут созданы плоскостные спортивные площадки для занятия различными видами спорта (в т.ч. футбол, баскетбол, волейбол, воркаут, занятия на силовых тренажерах). Цифровая инфраструктура предоставит возможность гражданам всех возрастов понимать загруженность площадки в определенный момент времени, выбирать время для занятий, а также подобрать индивидуальную программу для проведения самостоятельных занятий. Субъекты самостоятельно выбирают место расположения данных площадок. При этом не менее 20 площадок ежегодно будут расположены на сельских территориях	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов	
1.5	Созданы (модернизированы) спортивные велодорожки	-	Километр; тысяча метров	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	115,0000	-	-	Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку оборудования, покрытий и комплектующих для создания или модернизации спортивных велодорожек в целях развития физической культуры и массового спорта при благоустройстве общественных пространств. Спортивные велодорожки создаются по стандартам и оборудуются освещенными зонами начала (старта) и окончания (финиша) маршрута. Дорожки могут быть с асфальтовым, бетонным или специальным амортизирующим покрытием, обустроены соответствующей разметкой и обеспечивают безопасность пользователей и пешеходов	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов	

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73% граждан трудоспособного возраста	
1.1	Разработаны проекты документов по созданию и эксплуатации объектов спорта, обустройству общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, а также для разработки комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	10 000,00	10 000,00	37 000,00	
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	10 000,00	10 000,00	37 000,00	
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Привлечены дополнительные внебюджетные инвестиции на развитие спортивной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Созданы (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры массового спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Созданы "умные" спортивные площадки	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	3 045 000,00	3 150 000,00	8 295 000,00	
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	7 900 000,00	
1.4.1.1.	в том числе:межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	7 900 000,00	
1.4.1.1.1.	из них: бюджетам субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	7 900 000,00	
1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	3 045 000,00	3 150 000,00	8 295 000,00	
1.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Созданы (модернизированы) спортивные велодорожки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 000,00	3 155 000,00	3 160 000,00	8 532 000,00	
в том числе:федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	8 137 000,00	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	3 045 000,00	3 150 000,00	8 295 000,00	
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

N п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	На конец 2022 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73% граждан трудоспособного возраста	
1.1.	Разработаны проекты документов по созданию и эксплуатации объектов спорта, обустройству общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, а также для разработки комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17000	
1.2.	Привлечены дополнительные внебюджетные инвестиции на развитие спортивной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,0 0	100000	
1.3.	Созданы (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры массового спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.4.	Созданы "умные" спортивные площадки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	2000000	
1.5.	Созданы (модернизированы) спортивные велодорожки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Приложение N 1
к паспорту федерального проекта
Бизнес-спринт

План реализации федерального проекта

N п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
		Начало	Окончание	предшественники	последователи					
1	Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73% граждан трудоспособного возраста	
1.1	Результат "Разработаны проекты документов по созданию и эксплуатации объектов спорта, обустройству общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, а также для разработки комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А.Р.	Разработаны проекты сводов правил, регламентирующих требования по созданию и эксплуатации типов объектов спорта, в том числе для обустройства общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, повышения эффективности эксплуатации объектов спорта и продвижения спортивных компетенций; проекты национальных стандартов ГОСТ Р (первые редакции), регулирующих требования к конструктивным элементам объектов спорта и спортивному оборудованию и инвентарю. Разработаны проекты нормативных документов, направленные на создание комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений	Нет	Акты выполненных работ	
1.1.1	Контрольная точка "Закупка работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта включена в план закупок"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирницкий С.И.	Приказ Закупка работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта включена в план закупок	-	-	
1.1.2	Контрольная точка "Закупка работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, включена в план закупок"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирницкий С.И.	Приказ Закупка работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, включена в план закупок	-	-	
1.1.3	Контрольная точка "Закупка работ по разработке комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений включена в план закупок"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Приказ Закупка работ по разработке комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений включена в план закупок	-	-	
1.1.4	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта включена в план закупок"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирницкий С.И.	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта	-	-	
1.1.5	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирницкий С.И.	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом	-	-	
1.1.6	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение работ по разработке комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений	-	-	
1.1.7	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на выполнение работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок"	-	15.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирницкий С.И.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте на выполнение работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	-	-	
1.1.8	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на выполнение работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок"	-	15.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирницкий С.И.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте на выполнение работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	-	-	
1.1.9	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на выполнение работ по разработке комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок"	-	15.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте на выполнение работ по комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	-	-	
1.1.10	Контрольная точка "Направлены в Росстандарт первые редакции проектов национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирницкий С.И.	Исходящее письмо Письмо разработчика	-	-	
1.1.11	Контрольная точка "Размещены во ФГИС "БЕРЕСТА" Росстандарта уведомления о разработке проектов национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, на основе первых редакций"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирницкий С.И.	Прочий тип документа Уведомление из ФГИС "БЕРЕСТА"	-	-	
1.1.12	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирницкий С.И.	Акт Акт выполненных работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта	-	-	
1.1.13	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирницкий С.И.	Акт Акт выполненных работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом	-	-	
1.1.14	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по разработке комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Акт Акт выполненных работ по разработке комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений	-	-	
1.1.15	Контрольная точка "Закупка работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта включена в план закупок"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	27	Смирницкий С.И.	Приказ Закупка работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта включена в план закупок	-	-	
1.1.16	Контрольная точка "Закупка работ по разработке комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений включена в план закупок"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	28	Росляков А.В.	Приказ Закупка работ по разработке комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений включена в план закупок	-	-	
1.1.17	Контрольная точка "Закупка работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, включена в план закупок"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирницкий С.И.	Приказ Закупка работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, включена в план закупок	-	-	
1.1.18	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта"	-	30.04.2023	23	30	Смирницкий С.И.	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта	-	-	
1.1.19	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений"	-	30.04.2023	24	31	Росляков А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение работ по разработке комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений	-	-	
1.1.20	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирницкий С.И.	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом	-	-	
1.1.21	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на выполнение работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок"	-	15.05.2023	27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирницкий С.И.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте на выполнение работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	-	-	
1.1.22	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на выполнение работ по разработке комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок"	-	15.05.2023	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте на выполнение работ по комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	-	-	
1.1.23	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на выполнение работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок"	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирницкий С.И.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте на выполнение работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	-	-	
1.1.24	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирницкий С.И.	Акт Акт выполненных работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта	-	-	
1.1.25	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по разработке комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Акт Акт выполненных работ по разработке комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений	-	-	
1.1.26	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирницкий С.И.	Акт Акт выполненных работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом	-	-	
1.1.27	Контрольная точка "Закупка работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта включена в план закупок"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Смирницкий С.И.	Приказ Закупка работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта включена в план закупок	-	-	
1.1.28	Контрольная точка "Закупка работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, включена в план закупок"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирницкий С.И.	Приказ Закупка работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, включена в план закупок	-	-	
1.1.29	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта"	-	30.04.2024	12	18	Смирницкий С.И.	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта	-	-	
1.1.30	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирницкий С.И.	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом	-	-	
1.1.31	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на выполнение работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок"	-	15.05.2024	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирницкий С.И.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте на выполнение работ разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	-	-	
1.1.32	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на выполнение работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок"	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирницкий С.И.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте на выполнение работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	-	-	
1.1.33	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирницкий С.И.	Акт Акт выполненных работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	-	-	
1.1.34	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирницкий С.И.	Акт Акт выполненных работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на объекты общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом	-	-	
1.2	Результат "Привлечены дополнительные внебюджетные инвестиции на развитие спортивной инфраструктуры"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А.Р.	Привлечены внебюджетные инвестиции на развитие спортивной инфраструктуры в размере не менее 10 рублей на каждый использованный рубль предоставленной кредитным организациям субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов	Нет	Данные субъектов РФ	
1.2.1	Контрольная точка "Проведен конкурс на предоставление субсидий из федерального бюджета кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта"	-	20.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Протокол Протокол решения конкурсной комиссии	-	-	
1.2.2	Контрольная точка "С кредитными организациями заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Соглашение Заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта	-	-	
1.2.3	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта	-	-	
1.2.4	Контрольная точка "Представлен отчет за 2022 год об использовании субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Отчет за 2023 год об использовании субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта	-	-	
1.2.5	Контрольная точка "Проведен конкурс на предоставление субсидий из федерального бюджета кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта"	-	20.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Протокол Протокол решения конкурсной комиссии	-	-	
1.2.6	Контрольная точка "С кредитными организациями заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Соглашение Заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта	-	-	
1.2.7	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта	-	-	
1.3	Результат "Созданы (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры массового спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А.Р.	Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание (реконструкцию) не менее 70 объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве и концессионных соглашений	Нет	Данные субъектов РФ	
1.3.1	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на создание объектов спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на бюджетам субъектам Российской Федерации на создание объектов спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений	-	-	
1.3.2	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на объектов спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Отчет за 1 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на объектов спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений	-	-	
1.3.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Росляков А.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	-	-	
1.3.4	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры с применением механизма типовых концессий"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Отчет за 2 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание объектов спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений	-	-	
1.3.5	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание объектов спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание объектов спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений	-	-	
1.3.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.2023	03	09	Росляков А.В.	Акт Акт о завершении строительно-монтажных работ	-	-	
1.3.7	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.12.2023	04	10	Росляков А.В.	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	-	-	
1.3.8	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Акт Акты о вводе в эксплуатацию объектов спорта	-	-	
1.3.9	Контрольная точка "Представлен отчет за 2023 год об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание объектов спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Отчет за 2024 год об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание объектов спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений	-	-	
1.3.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на создание объектов спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на создание объектов спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений	-	-	
1.3.11	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание объектов спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Отчет за 1 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание объектов спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений	-	-	
1.3.12	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Росляков А.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	-	-	
1.3.13	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание объектов спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Отчет за 2 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание объектов спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений	-	-	
1.3.14	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание объектов спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание объектов спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений	-	-	
1.3.15	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Акт Акт о завершении строительно-монтажных работ	-	-	
1.3.16	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.12.2024	04	10	Росляков А.В.	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	-	-	
1.3.17	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Акт Акты о вводе в эксплуатацию объектов спорта	-	-	
1.4	Результат "Созданы "умные" спортивные площадки"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А.Р.	Субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок, обеспечивающих проведение самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам. Будут созданы плоскостные спортивные площадки для занятия различными видами спорта (в т.ч. футбол, баскетбол, волейбол, воркаут, занятия на силовых тренажерах). Цифровая инфраструктура возможность гражданам всех возрастов понимать загруженность площадки в определенный момент времени, выбирать время для занятий, а также подобрать индивидуальную программу для проведения самостоятельных занятий. Субъекты самостоятельно выбирают место расположения данных площадок. При этом не менее 20 площадок ежегодно будут расположены на сельских территориях	Нет	Данные субъектов РФ	
1.4.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Соглашение Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок	-	-	
1.4.2	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Отчет за 1 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок	-	-	
1.4.3	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Прочий тип документа Отчет за 2 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок	-	-	
1.4.4	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Представлен отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок	-	-	
1.4.5	Контрольная точка "Закуплено оборудование для создания "умных" спортивных площадок, обеспечивающих проведение самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Акт Акт приемки-передачи оборудования	-	-	
1.4.6	Контрольная точка "Представлен отчет за 2022 год об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Отчет за 2022 год об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок	-	-	
1.4.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Соглашение Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок	-	-	
1.4.8	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Отчет за 1 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок	-	-	
1.4.9	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Представлен отчет за 2 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок	-	-	
1.4.10	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Представлен отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок	-	-	
1.4.11	Контрольная точка "Закуплено оборудование для создания "умных" спортивных площадок, обеспечивающих проведение самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Акт Акт приемки-передачи оборудования	-	-	
1.4.12	Контрольная точка "Представлен отчет за 2023 год об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Отчет за 2023 год об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок	-	-	
1.4.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Соглашение Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок	-	-	
1.4.14	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Отчет за 1 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок	-	-	
1.4.15	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Отчет за 1 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок	-	-	
1.4.16	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок	-	-	
1.4.17	Контрольная точка "Закуплено оборудование для создания "умных" спортивных площадок, обеспечивающих проведение самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Акт Акт приемки-передачи оборудования	-	-	
1.5	Результат "Созданы (модернизированы) спортивные велодорожки"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А.Р.	Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку оборудования, покрытий и комплектующих для создания или модернизации спортивных велодорожек в целях развития физической культуры и массового спорта при благоустройстве общественных пространств. Спортивные велодорожки создаются по стандартам и оборудуются освещенными зонами начала (старта) и окончания (финиша) маршрута. Дорожки могут быть с асфальтовым, бетонным или специальным амортизирующим покрытием, обустроены соответствующей разметкой и обеспечивают безопасность пользователей и пешеходов	Нет	Данные субъектов РФ	
1.5.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на создание новых спортивных велодорожек"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Соглашение Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на создание новых спортивных велодорожек	-	-	
1.5.2	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых спортивных велодорожек"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Отчет за 1 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых спортивных велодорожек	-	-	
1.5.3	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых спортивных велодорожек"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Отчет за 2 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых спортивных велодорожек	-	-	
1.5.4	Контрольная точка "Закуплено оборудование, покрытия и комплектующие для создания или модернизации спортивных велодорожек для развития физической культуры и массового спорта при благоустройстве общественных пространств"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Акт Акт приемки-передачи оборудования, покрытий и комплектующих	-	-	
1.5.5	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых спортивных велодорожек"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А.В.	Отчет Представлен отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых спортивных велодорожек	-	-	

Приложение N 2
к паспорту федерального проекта
Бизнес-спринт

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год	
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом Процент	
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амурская область	21,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,4000	36,6000	41,8000	-	-	
Еврейская автономная область	10,4000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,9000	29,2000	35,4000	-	-	
Забайкальский край	14,8000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,4000	32,3000	38,1000	-	-	
Камчатский край	26,5000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,8000	40,5000	45,1000	-	-	
Магаданская область	26,6000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,9000	40,5000	45,2000	-	-	
Приморский край	28,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,0000	41,5000	46,0000	-	-	
Республика Бурятия	28,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,0000	41,5000	46,0000	-	-	
Республика Саха (Якутия)	24,3000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,0000	38,9000	43,8000	-	-	
Сахалинская область	38,6000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,5000	50,4000	54,4000	-	-	
Хабаровский край	28,6000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,5000	43,4000	48,4000	-	-	
Чукотский автономный округ	19,2000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	35,3000	40,7000	-	-	
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кировская область	24,7000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,4000	39,2000	44,0000	-	-	
Нижегородская область	29,6000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,3000	42,6000	47,0000	-	-	
Оренбургская область	30,6000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,1000	43,3000	47,6000	-	-	
Пензенская область	35,1000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42,7000	46,5000	50,3000	-	-	
Пермский край	31,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,4000	43,6000	47,8000	-	-	
Республика Башкортостан	33,7000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	41,6000	45,5000	49,4000	-	-	
Республика Марий Эл	30,9000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,3000	43,5000	47,7000	-	-	
Республика Мордовия	31,1000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,5000	43,7000	47,9000	-	-	
Республика Татарстан (Татарстан)	34,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42,8000	47,2000	51,6000	-	-	
Самарская область	28,8000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,6000	42,1000	46,5000	-	-	
Саратовская область	22,1000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,3000	37,4000	42,5000	-	-	
Удмуртская Республика	24,1000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	33,9000	38,8000	43,7000	-	-	
Ульяновская область	29,4000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,1000	42,5000	46,8000	-	-	
Чувашская Республика - Чувашия	32,7000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,8000	44,8000	48,8000	-	-	
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Архангельская область	22,3000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,4000	37,5000	42,6000	-	-	
Вологодская область	6,6000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,9000	26,5000	33,2000	-	-	
город федерального значения Санкт-Петербург	5,6000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,1000	27,3000	34,6000	-	-	
Калининградская область	27,6000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,7000	41,2000	45,8000	-	-	
Ленинградская область	15,4000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,9000	32,7000	38,4000	-	-	
Мурманская область	61,8000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	64,0000	65,2000	66,3000	-	-	
Ненецкий автономный округ	30,4000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,9000	43,2000	47,4000	-	-	
Новгородская область	30,9000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,3000	43,5000	47,7000	-	-	
Псковская область	30,3000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,8000	43,1000	47,4000	-	-	
Республика Карелия	32,8000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,8000	44,9000	48,9000	-	-	
Республика Коми	27,1000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,3000	40,9000	45,5000	-	-	
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кабардино-Балкарская Республика	27,8000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,8000	41,4000	45,9000	-	-	
Карачаево-Черкесская Республика	25,4000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,9000	39,7000	44,4000	-	-	
Республика Дагестан	31,7000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	41,0000	45,6000	50,2000	-	-	
Республика Ингушетия	13,2000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,2000	28,1000	33,1000	-	-	
Республика Северная Осетия - Алания	15,6000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,1000	29,8000	34,6000	-	-	
Ставропольский край	28,9000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,7000	42,1000	46,5000	-	-	
Чеченская Республика	14,3000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,0000	31,9000	37,8000	-	-	
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Алтайский край	31,5000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,8000	44,0000	48,1000	-	-	
Иркутская область	22,2000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,4000	34,4000	38,5000	-	-	
Кемеровская область - Кузбасс	28,9000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,7000	42,1000	46,5000	-	-	
Красноярский край	24,2000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,0000	38,8000	43,7000	-	-	
Новосибирская область	26,7000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	40,6000	45,2000	-	-	
Омская область	27,1000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,3000	40,9000	45,5000	-	-	
Республика Алтай	22,6000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,7000	37,7000	42,8000	-	-	
Республика Тыва	18,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,0000	31,5000	36,0000	-	-	
Республика Хакасия	27,1000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,3000	40,9000	45,5000	-	-	
Томская область	26,4000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,7000	40,4000	45,0000	-	-	
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Курганская область	30,8000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,2000	43,5000	47,7000	-	-	
Свердловская область	30,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,6000	44,4000	49,2000	-	-	
Тюменская область	30,5000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,0000	43,3000	47,5000	-	-	
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	25,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,6000	39,4000	44,2000	-	-	
Челябинская область	24,8000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,4000	39,3000	44,1000	-	-	
Ямало-Ненецкий автономный округ	30,1000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,7000	43,0000	47,3000	-	-	
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Белгородская область	33,6000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	41,5000	45,4000	49,4000	-	-	
Брянская область	21,8000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	34,2000	38,3000	-	-	
Владимирская область	29,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,8000	42,2000	46,6000	-	-	
Воронежская область	32,8000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,8000	44,9000	48,9000	-	-	
город федерального значения Москва	30,8000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,2000	43,5000	47,7000	-	-	
Ивановская область	23,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,0000	35,0000	39,0000	-	-	
Калужская область	28,7000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,6000	42,0000	46,4000	-	-	
Костромская область	33,9000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	41,7000	45,6000	49,5000	-	-	
Курская область	36,4000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	43,7000	47,4000	51,0000	-	-	
Липецкая область	37,7000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	44,8000	48,3000	51,8000	-	-	
Московская область	24,3000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,0000	40,4000	45,8000	-	-	
Орловская область	28,9000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,7000	42,1000	46,5000	-	-	
Рязанская область	30,3000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,8000	43,1000	47,4000	-	-	
Смоленская область	30,9000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,3000	43,5000	47,7000	-	-	
Тамбовская область	34,3000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42,0000	45,9000	49,8000	-	-	
Тверская область	28,8000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,6000	39,1000	42,5000	-	-	
Тульская область	34,1000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	41,9000	45,8000	49,7000	-	-	
Ярославская область	32,7000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,8000	44,8000	48,8000	-	-	
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Астраханская область	23,1000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	33,1000	38,1000	43,1000	-	-	
Волгоградская область	28,4000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,3000	41,8000	46,2000	-	-	
город федерального значения Севастополь	13,1000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,1000	31,1000	37,1000	-	-	
Краснодарский край	41,8000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	49,0000	52,7000	56,3000	-	-	
Республика Адыгея (Адыгея)	29,7000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,4000	42,7000	47,0000	-	-	
Республика Калмыкия	23,8000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	33,6000	38,6000	43,5000	-	-	
Республика Крым	12,9000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,9000	30,9000	36,9000	-	-	
Ростовская область	30,8000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,2000	43,5000	47,7000	-	-	
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Процент	
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амурская область	77,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	84,8000	84,9000	85,0000	-	-	
Еврейская автономная область	53,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	56,0000	57,0000	62,1000	-	-	
Забайкальский край	40,3000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	49,0000	54,0000	62,1000	-	-	
Камчатский край	80,5000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	83,2000	83,5000	83,6000	-	-	
Магаданская область	67,8000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	71,6000	71,8000	72,5000	-	-	
Приморский край	42,5000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,8000	55,0000	62,1000	-	-	
Республика Бурятия	59,5000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	61,0000	62,0000	63,0000	-	-	
Республика Саха (Якутия)	46,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	47,0000	55,0000	62,1000	-	-	
Сахалинская область	57,1000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	58,6000	60,1000	62,1000	-	-	
Хабаровский край	74,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	74,2000	74,3000	74,4000	-	-	
Чукотский автономный округ	54,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	56,0000	58,0000	62,1000	-	-	
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кировская область	50,5000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	57,0000	57,1000	57,2000	-	-	
Нижегородская область	54,6000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	57,4000	57,5000	59,0000	-	-	
Оренбургская область	63,1000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	68,1000	68,2000	-	-	
Пензенская область	74,5000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	78,0000	78,1000	78,2000	-	-	
Пермский край	59,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	61,5000	61,7000	61,8000	-	-	
Республика Башкортостан	66,9000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	72,0000	72,1000	72,2000	-	-	
Республика Марий Эл	60,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	62,0000	62,1000	62,2000	-	-	
Республика Мордовия	78,5000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	80,1000	80,2000	-	-	
Республика Татарстан (Татарстан)	67,3000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	68,7000	68,8000	68,9000	-	-	
Самарская область	41,3000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42,2000	43,1000	43,1000	-	-	
Саратовская область	68,9000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	69,3000	69,7000	70,0000	-	-	
Удмуртская Республика	62,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	62,5000	63,0000	63,5000	-	-	
Ульяновская область	69,3000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	76,0000	77,0000	78,2000	-	-	
Чувашская Республика - Чувашия	78,9000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	79,2000	79,5000	79,8000	-	-	
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Архангельская область	54,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	55,0000	58,0000	62,1000	-	-	
Вологодская область	44,1000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	51,4000	51,5000	51,6000	-	-	
город федерального значения Санкт-Петербург	61,3000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	63,5000	65,7000	67,8000	-	-	
Калининградская область	51,3000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	51,6000	56,6000	62,1000	-	-	
Ленинградская область	43,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,2000	46,3000	46,4000	-	-	
Мурманская область	47,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	49,0000	55,0000	62,1000	-	-	
Ненецкий автономный округ	61,5000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	67,2000	67,3000	67,4000	-	-	
Новгородская область	78,5000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	79,0000	79,5000	80,0000	-	-	
Псковская область	80,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	81,2000	81,3000	81,5000	-	-	
Республика Карелия	63,1000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	64,8000	65,0000	66,0000	-	-	
Республика Коми	61,3000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	63,0000	63,1000	63,2000	-	-	
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кабардино-Балкарская Республика	56,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	57,0000	58,0000	62,1000	-	-	
Карачаево-Черкесская Республика	52,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	54,0000	58,0000	62,1000	-	-	
Республика Дагестан	52,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	57,8000	58,0000	62,1000	-	-	
Республика Ингушетия	52,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	55,0000	58,0000	62,1000	-	-	
Республика Северная Осетия - Алания	39,1000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	49,0000	55,0000	62,1000	-	-	
Ставропольский край	58,2000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	59,2000	63,5000	65,0000	-	-	
Чеченская Республика	52,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	54,0000	58,0000	62,1000	-	-	
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Алтайский край	56,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	64,2000	64,3000	64,4000	-	-	
Иркутская область	46,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	48,5000	50,0000	52,0000	-	-	
Кемеровская область - Кузбасс	67,6000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	68,5000	68,6000	68,7000	-	-	
Красноярский край	53,2000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	55,5000	58,0000	62,1000	-	-	
Новосибирская область	47,5000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,5000	55,0000	60,0000	-	-	
Омская область	61,5000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	
Республика Алтай	54,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	56,0000	58,0000	60,0000	-	-	
Республика Тыва	80,9000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	91,2000	91,3000	91,4000	-	-	
Республика Хакасия	57,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	60,1000	60,2000	-	-	
Томская область	54,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	55,7000	55,9000	56,0000	-	-	
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Курганская область	68,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	71,1000	71,2000	71,3000	-	-	
Свердловская область	56,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	57,0000	58,0000	60,0000	-	-	
Тюменская область	56,5000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	63,2000	63,3000	63,4000	-	-	
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	43,8000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,8000	46,9000	47,0000	-	-	
Челябинская область	54,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	56,5000	58,0000	60,0000	-	-	
Ямало-Ненецкий автономный округ	62,1000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	62,8000	63,5000	64,2000	-	-	
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Белгородская область	88,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	89,0000	90,0000	91,0000	-	-	
Брянская область	59,2000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	64,0000	64,1000	64,2000	-	-	
Владимирская область	64,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	68,1000	68,2000	-	-	
Воронежская область	69,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	78,0000	78,1000	78,2000	-	-	
город федерального значения Москва	58,7000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	59,1000	59,5000	59,9000	-	-	
Ивановская область	48,5000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	51,0000	53,0000	-	-	
Калужская область	90,3000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	90,5000	90,6000	90,7000	-	-	
Костромская область	57,5000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	58,0000	59,0000	60,0000	-	-	
Курская область	55,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	56,0000	58,0000	60,0000	-	-	
Липецкая область	74,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	76,7000	76,8000	76,9000	-	-	
Московская область	30,4000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,5000	31,6000	31,7000	-	-	
Орловская область	52,3000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	55,0000	57,0000	57,0000	-	-	
Рязанская область	58,1000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	58,6000	59,2000	60,1000	-	-	
Смоленская область	66,4000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	69,5000	69,6000	69,7000	-	-	
Тамбовская область	84,8000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	90,0000	90,1000	90,2000	-	-	
Тверская область	58,5000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	60,1000	60,2000	-	-	
Тульская область	65,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	67,0000	68,0000	70,0000	-	-	
Ярославская область	51,2000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	52,5000	53,7000	55,0000	-	-	
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Астраханская область	45,3000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,5000	48,0000	49,0000	-	-	
Волгоградская область	55,7000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,8000	60,9000	61,0000	-	-	
город федерального значения Севастополь	57,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	58,0000	60,0000	62,1000	-	-	
Краснодарский край	59,1000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,4000	60,5000	60,6000	-	-	
Республика Адыгея (Адыгея)	60,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	62,0000	62,1000	62,2000	-	-	
Республика Калмыкия	44,5000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	44,8000	45,1000	45,4000	-	-	
Республика Крым	42,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	45,0000	53,5000	62,1000	-	-	
Ростовская область	57,7000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	58,5000	58,7000	59,0000	-	-	

Дополнительные и обосновывающие материалы федерального проекта

Бизнес-спринт

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. рублей)	"Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Доля средств внебюджетных источников в общих расходах на финансирование физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)	
1. Созданы (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры массового спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений	0,00	80,00	70,00	10,00	160,00	
2. Привлечены дополнительные внебюджетные инвестиции на развитие спортивной инфраструктуры	200 000,00	70,00	70,00	10,00	150,00	
3. Созданы "умные" спортивные площадки	7 900 000,00	50,00	20,00	40,00	110,00	
4. Разработаны проекты документов по созданию и эксплуатации объектов спорта, обустройству общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, а также для разработки комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений	37 000,00	30,00	40,00	20,00	90,00	
5. Созданы (модернизированы) спортивные велодорожки	0,00	35,00	10,00	30,00	75,00	
6. ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	8 137 000,00	265,00	210,00	110,00	585,00